«УТВЕРЖДАЮ»
                                       Директор
                                       ГМУ «Санаторий «Белоруссия»
_________________ Филон А.М. 
 «____» ________________ 2024г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на «Текущий ремонт помещений лечебного корпуса для размещения жемчужных ванн 
ГМУ «Санаторий «Белоруссия», по адресу: г. Ялта, пгт Кореиз, спуск Мисхорский, дом 2».

1. Основанием для выполнения работ по ремонту помещений лечебного корпуса для размещения жемчужных ванн ГМУ «Санаторий «Белоруссия» по адресу: г. Ялта, пгт Кореиз, спуск Мисхорский, дом 2 является Дефектный акт от ______________ 2024г.
2. Место выполнения работ лечебный корпус ГМУ «Санаторий «Белоруссия» по адресу: РК, г. Ялта, пгт. Кореиз, спуск Мисхорский, дом 2.
3. Срок выполнения работ: с даты заключения договора до 31.08.2024г.
4. На результаты выполненных работ устанавливается гарантийный срок 24 месяца с даты подписания Акта сдачи – приемки выполненных работ.
5. Транспортные расходы – за счет Подрядчика. Стоимость материалов входит в стоимость работ по Договору.
6. Ориентировочный перечень работ по ремонту помещений лечебного корпуса для размещения жемчужных ванн: 
  
№ п/п	Наименование работ, услуг, материалов	Единица измерения	Количество	Примечание 	
Демонтаж	
1	Разборка: мелкоблочных стен	М3	1,03		
2	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: глухих ДЕМОНТАЖ	М2	10,0		
3	Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках: кирпичных	М3	0,16		
4	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	М2	88,53		
5	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	М2	42,0		
6	Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. (ДЕМОНТАЖ Прим. вешалки, дозаторы, держатели...)	шт	10		
7	Снятие дверных полотен	М2	8,2		
8	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	5		
9	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	М2	20,4		
10	Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: бетонных	М2	18		
11	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: свыше 50 до 100 см2	м	6,0		
12	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: пластиковых панелей	М2	18,0		
13	Демонтаж: унитазов и писсуаров	шт	1		
14	Демонтаж: умывальников и раковин	шт	2		
15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм ДЕМОНТАЖ	м	26		
16	Монтаж водонагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом: до 50 л (ДЕМОНТАЖ прим. гидромассажное оборудование к бойлеру)	шт	1		
17	Монтаж водонагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом: свыше 50 до 100 л ДЕМОНТАЖ	шт	1		
18	Снятие кранов водоразборных или туалетных	шт	6		
19	Установка фильтров диаметром: 25 мм ДЕМОНТАЖ	шт	1		
20	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм ДЕМОНТАЖ	м	12		
21	Демонтаж: выключателей, розеток	шт	7		
22	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	шт	6		
23	Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт ДЕМОНТАЖ	шт	1		
24	Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении ДЕМОНТАЖ	шт	1		
25	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	10,889		
Монтаж 	
26	Устройство перегородок из ПВХ профилей: глухих	м2	13,62	
	
27	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	м2	42,0		
28	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	м2	50,34		
29	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2	М2	5,04		
30	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	м2	18,0		
31	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: от 10 до 50 м2	м2	15,0		
32	Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий	шт	10		
33	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113)	м2	4,0		
34	Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	М2	4,0		
35	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	4,0		
36	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2	м	8,0		
37	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм	шт	2		
38	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм	м	16,0		
39	Монтаж водонагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом: свыше 50 до 100 л	шт	1		
40	Установка фильтров диаметром: 25 мм	шт	1		
41	Установка ванн гидромассажных: прямых	шт	3		
42	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм	шт	2		
43	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	м	9		
44	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	м	3,5		
45	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	М3	0,06		
46	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный под штукатурку по стенам или в бороздах	м	37,5		
47	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: в готовых каналах стен и перекрытий	м	12,5		
48	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	3		
49	Светильник в подвесных потолках	шт	10		
50	Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВ	компл	1		
51	Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	1		

Составили:                                 			__________________________ Сагоян С.А.
           __________________________ Ёлшин С.Ю.
						           __________________________  Исакова Е.С.
                                				            __________________________ Суясов А.В.    
                               				            __________________________ Михальский Ю.В.